용산지구 농어촌 생활용수 개발

실 태		지하수 고갈로 인한 마을상수도 수질악화 및 수량부족에 따른 먹는 물 수급불편

추진방향		지방상수도 공급을 통한 먹는 물 수급불편 해소

기대효과		지방상수도 공급을 통한 안정적인 먹는 물 공급을 통한 주민의 복지 증진

사 업 개 요

위    치 : 장흥군 용산면, 안양면 지방상수도 미 급수지역

사업기간 : 2013 ~ 2015년(3년간)

사업규모 : 상수도 관로L=35.0km, 가압장 2개소

- 16개마을(654세대/1,281명) 지방상수도 공급

사 업 비 : 60억원(국비 42억, 도비 5.4억, 군비 12.6억)

⇒ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년	2014년	2015년	2016년이후
계	60	15	33.21	11.79	-
국 비	42	10.5	23.25	8.25	-
도 비	5.4	1.35	2.99	1.06	-
시 비	12.6	3.15	6.97	2.48	-
기 타					-

사업진행 현황

2013년 07월 :	실시설계 용역 및 행정협의 완료
2013년 08월 :	총괄 및 1차분 공사 추진
2014년 03월 :	1차분 공사완료
2015년 02월 :	2차분 공사완료
2015년 03월 :	3차분 공사추진 / 2015년 8월까지

조 감 도

공사 전경 전경사진