유용미생물 생산시설 확충

실 태

추진방향

기대효과

사 업 개 요

위    치 :

사업기간 :

사업규모 :

사 업 비 :    억원(국비   억, 도비   억, 군비    억)

⇒ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계
국 비
도 비
시 비
기 타

사업진행 현황---

0000년 00월 :
0000년 00월 :
0000년 00월 :
0000년 00월 :
0000년 00월 :

조 감 도

공사 전경 전경사진

실 태		농가요구도 대비 유용미생물 생산량 부족으로 농업인 애로 발생

추진방향		농업기술센터내에 유용미생물 생산․공급시설 확대 설치 친환경 농축산물 생산에 필요한 유용미생물 생산․공급 기반 구축

기대효과		유용미생물을 활용하여 농축산물의 건전성 확보로 농자재비용 절감과 친환경농업 유도

사 업 개 요

위    치 : 장흥군 장흥읍 원도리 276(농업기술센터 내)

사업기간 : 2013. 04. 22. ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : 생산시설 및 배양장비 구축 : 1개소 330㎡, 250톤/년

멸균배양기 0.5톤 3조, 혼합조 1.2톤 1조, 포장기 등

사 업 비 : 10억원(군비 10억)

⇒ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	10	-	7.5	2.5	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	10	-	7.5	2.5	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

2013년 04월 :	유용미생물 배양실 확충계획 수립
2013년 07월 :	설계용역 착수
2014년 01월 :	배양실공사 및 감리용역 착수
2014년 05월 :	배양실공사 및 감리용역 준공
2014년 06월 :	유용미생물 생산시설 배양시스템 구축
2014년 08월 :	유용미생물 배양실 준공식 개최
2014년 09월 :	유용미생물 배양실 운영 및 농가 공급

조 감 도

공사 전경 전경사진

신축 유용미생물 배양실 전경	유용미생물 배양시스템 구축